Author: ced

COMUNE DI MACERATA
SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI

 OGGETTO:  Lavori di restauro e risanamento conservativo  della CIVICA BIBLIOTECA E PINACOTECA. 

SCHEDA 1 - SUB- ELEMENTO  "ORGANIZZAZIONE  DI CANTIERE"

Il progetto di cantiere dovrà essere redatto tenendo conto delle interferenze con i cantieri limitrofi e delle interconnessioni con le attività della biblioteca e del luogo , nonchè delle consegne per fasi  previste nel presente appalto e contemplate  all'art.10 del CSA. 
 
OBIETTIVI

La soluzione dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
1)	ottimizzare  il PSC di tutte le opere provvisionali necessarie per tenere conto delle interferenze dei cantieri limitrofi,  delle attività della biblioteca che dovranno essere garantite secondo le indicazioni fornite dal Dirigente del Servizio Cultura con nota dell’11.07.2005,  anche modificando  lo svolgimento delle FASI di LAVORAZIONE descritte all'art.10  del CSA;
2)	migliorare le caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, di smontaggio e rimontaggio delle attrezzature ed apparecchiature di cantiere;
3)	ottimizzare gli accessi pedonali e carrabili del cantiere sia dei lavoratori che  degli utenti della biblioteca in considerazione delle FASI di LAVORAZIONE anche tenendo conto delle indicazioni del Comandante dei Vigili Urbani del 17/05/2005 prot.n. 24035.
4)	aumentare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e utenti della Biblioteca e comunque garantire i fattori minimi di sicurezza nonchè le prescrizioni tecniche e prestazionali riportate nel piano di sicurezza e Coordinamento. 

ELABORATI e CONTENUTI

Il progetto del cantiere dovrà avere un livello di completezza ed un grado di dettaglio che definisca compiutamente l'organizzazione di cantiere includendo una “  RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL PROGETTO DI CANTIERE”   in cui vengano  esplicitati, anche graficamente,  i seguenti punti:

-localizzazione del cantiere e delle aree che si intendono occupare in ciascuna FASE DI LAVORAZIONE sia interna che esterna alla Biblioteca  (allegare PLANIMETRIA);

-indicazione delle FASI DI LAVORAZIONE e, per ciascuna di esse, l’indicazione delle superfici disponibili alle attività della Biblioteca e le vie d’esodo che dovranno essere proporzionate alle superfici disponibili  (allegare PLANIMETRIA);

-indicazione delle aree adibite all’approvvigionamento dei materiali da costruzione  ed all’eventuale  stoccaggio temporaneo  dei materiali di risulta (allegare PLANIMETRIA);

-modalità di recinzione dell'area di cantiere con attenzione alle zone utilizzate  dagli utenti degli altri edifici attivati sull'area interessata dai lavori (allegare PLANIMETRIA ed ELABORATI GRAFICI);

-progetto delle opere provvisionali;

-individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie per ciascuna FASE di LAVORAZIONE;

-specifiche tecniche degli impianti e delle attrezzature di cantiere complete delle caratteristiche principali degli equipaggiamenti che si intendono utilizzare in caso di aggiudicazione (specifiche tecniche aventi un livello di completezza  ed un grado di dettaglio sufficiente a definire compiutamente la tipologia di detti equipaggiamenti ed impianti);

-interventi previsti per la mitigazione dell'impatto negativo dei lavori sia sulle preesistenze, sia  sull'ambiente circostante (inquinamento acustico, atmosferico e visivo), che sul traffico nelle immediate vicinanze del cantiere (allegare PLANIMETRIA ed ELABORATI GRAFICI).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Ing. Andrea Fornarelli

NB. Tutti gli elaborati presentati  non dovranno contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso o al prezzo offerto per la realizzazione dell’intervento o ai tempi delle singole fasi o a quello complessivo di realizzazione dello stesso,oggetto dell’offerta economica.
Il concorrente dovrà, inoltre, corredare ciascuna parte dell’offerta tecnica di un elenco degli elaborati che la compongono.